일산테크노밸리 조성사업 현황

□ 사업개요

○ 위    치 : 고양시 일산서구 대화동 일원

○ 면적/기간 : 850천㎡(26만평) / 2016년 ~ 2023년

○ 사 업 비 : 7,773억원  ※ 개발방식 : 도시개발사업(도시개발법)

○ 시 행 자 : 경기도, 고양시, 경기도시공사(65%), 고양도시관리공사(35%)

○ 개발구상 : AR/VR, 방송콘텐츠, 엔터테인먼트가 집적된 스마트 시티

	<추진배경>
➣ 판교테크노밸리 성공사례 확산 및 미래수요 창출형 도시모델 조성 ➣ 경기도 균형발전 및 북부지역의 미래 신성장거점 확보 ※ 「경기북부 10개년 발전계획」 제1장 산업‧경제부문 경기북부테크노밸리 조성

□ 추진경위

○ ’16. 6.29 : 입지선정 발표

○ ’17. 4.27 : 공동사업시행 협약체결 (道, 고양시, 경기도공, 고양도공)

○ ’18. 2.28 : 투자타당성 검토 완료 (지방공기업평가원)

○ ’18. 3.22 : 경기도시공사 신규 투자사업 추진 동의안 도의회 의결

○ ’18. 9.20 : 조사설계용역 착수 (경기도시공사)

○ ’19. 4.30 : 공동사업 시행변경 협약체결(공동사업시행자)

○ ’19. 6.18 : 구역지정 및 개발계획 승인 신청(경기도공→고양시)

□ 향후계획

조사설계 용역추진		구역지정 개발계획 승인		실시계획 승인․보상착수		공사착공		사업준공
’18.9. ~ ’21.		’19.12		’20.10		’21.2		’23.12

참고		위치도 및 토지이용구상(안)

위 치 도

토지이용계획도(안)

구 분		면 적(㎡)	구성비(%)
합 계		850,385	100
단독주택용지		8,104	1
상업용지		12,613	1.5
산업시설용지		323,342	38.1
	지식기반	205,182	24.2
	연구시설	25,396	3
	첨단제조업	92,764	10.9
복합지원용지		46,702	5.5
지원시설용지		22,687	2.7
도시기반시설용지		436,937	51.2
	도로	200,441	23.5
	주차장	11,610	1.4
	공원	71,979	8.4
	녹지	60,863	7.2
	공공공지	7,726	0.9
	하천	39,781	4.7
	유수지	43,002	5

	〈 토지이용계획도(안) 〉

※ 사업계획 면적 및 토지이용계획 등은 사업추진 과정에서 변경 될 수 있음

사업설명회 초청장